Załącznik Nr 10 do SWZ

Umowa Nr …
na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj

Umowa zawarta ....................... r. pomiędzy
.......................................................................................................................................
reprezentowaną/ym przez: ..........................................................................................
Zwaną/ym dalej „Zamawiającym”
a
.................... z siedzibą w .................... przy ul. ...................., .................... ....................; .................... zarejestrowaną w .................... pod numerem KRS ...................., posługującą się numerem REGON: ...................., oraz numerem NIP ...................., 
Reprezentowaną/ym przez: ............................................................................................
Zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
Zwanymi dalej „Stronami”
w związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej budowa zajezdni autobusowej dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga 
w Kielcach”", zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej jako: "pzp") w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 132, zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1
1.	Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie  zajezdni autobusowej dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach” wraz z pracami towarzyszącymi w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
2.	W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności:
1)	wykona dokumentację projektową zgodnie ze SWZ oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – Załącznik nr 1 do umowy.
2)	uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę oraz uzgodni warunki zasilania 
w media,
3)	wykona roboty budowlane zgodnie ze SWZ oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – Załącznik nr 1 do umowy.
4)	wykona dokumentację powykonawczą;
5)	przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 3 Umowy na warunkach określonych w § 7 Umowy;
6)	udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy na warunkach określonych w § 15 Umowy;
7)	udzieli gwarancji na urządzenia na warunkach określonych przez producenta.

3.	Realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, została podzielone na następujące etapy:
1)	Etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę;
2)	Etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą.
4.	Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Etapu 2 realizacji Harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do ustalenia ilości wykonanych robót dla potrzeb ich fakturowania wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone Podwykonawcy.
5.	Dokumentacja projektowa, obejmuje:
1)	dokumentację projektową budowlaną wraz z projektami branżowymi;
2)	dokumentację projektową wykonawczą; 
3)	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
6.	Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. 
7.	Całość dokumentacji i załączników winna być wykonana w języku polskim. 
8.	Wersja papierowa opracowania, w tym: 
a)	Projekt budowlany – 5 egz. 
b)	Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 1 egz.
c)	dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 2 egz. 
d)	dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami i atestami na użyte materiały budowlane 
2 egz.
9.	Dokumentacja musi zawierać wymagane dokumenty, opinie, uzgodnienia i zgody (o ile są wymagane). 
10.	Przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w celu jej zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia co do dokumentacji projektowej.
11.	Opracowania winny przejmować wykorzystanie dotychczas zrealizowanych elementów obiektu 
i instalacji będących przedmiotem opracowania w przypadku gdy ich budowa na to pozwala
12.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 
13.	Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.
14.	Zamawiający wymaga, aby dokumenty w wersji cyfrowej były zapisane na płytach CD lub innym nośniku cyfrowym, co najmniej w postaci plików PDF. Dokumentacja elektroniczna powinna być pogrupowana (foldery) według rodzajów dokumentów lub branż, a pliki powinno być opisane w ten sposób aby możliwa była identyfikacja ich zawartości. 
15.	Wykonawca jest także zobowiązany do wskazania:
a)	kodów CPV opisujących projektowane roboty budowlane (minimum 5),
b)	uprawnień osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji projektowanych robót budowlanych (kierownik budowy, projektantów ).
16.	Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, a w szczególności:
a)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2021 poz. 2454 z późn. zm.);
b)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2021 poz. 2458 z późn. zm.).
17.	Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy za pomocą własnych narzędzi i środków niezbędnych do wykonywania tego typu prac.
18.	Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie posługiwał się wyłącznie osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy

§ 2
Obowiązki Zamawiającego
1.	Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy 
w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.
2.	Zamawiający zobowiązuje się ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem będzie wykonywanie obowiązków i uprawnień przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane.
3.	Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w Harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. 
4.	Zamawiający zobowiązuje się w razie potrzeby do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody oraz energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Strony wspólnie ustalą zakres i sposób korzystania z mediów.
5.	Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach 
i w terminach określonych w § 7 Umowy. 
6.	Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i terminach określonych w § 10 Umowy.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy
1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym w § 1 z materiałów 
i urządzeń własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
2.	Wykonawca zobowiązuje się do przekazanie Zamawiającemu:
a)	pozwolenia na budowę wraz z trzema egzemplarzami w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej dokumentacji projektowej,
b)	dwóch egzemplarzy w wersji papierowej i jednego egzemplarza w wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej.
3.	Wykonawca ponosi koszty zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót;
4.	Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu oraz funkcjonowania pracy Urzędu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5.	Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z brzmieniem § 12 Umowy.
6.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.
7.	Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym, nie później niż do dnia odbioru robót. 
8.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy. 
9.	Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy wykonywane będą przez pracowników (Wykonawcy, Podwykonawców) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót sporządzi listę pracowników realizujących roboty budowlane, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz zakres wykonywanych robót. Lista powinna być za każdym razem aktualizowana w terminie 3 dni od zmiany stanu faktycznego (nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy).
10.	Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz Podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu kopię umowy o prace. Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
11.	Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9 i 10 stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 
12.	Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej każdego etapu robót, pozwalającej co najmniej na odtworzenie całości stanu obiektu w każdym z ważniejszych etapów prac oraz udokumentowania każdej z robót zanikających lub ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
14.	Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 
a)	kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót, 
b)	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, jak również pracownikom organów Nadzoru Budowlanego 
i nadzoru inwestorskiego dostępu na teren budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
15.	Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
16.	Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy podlega akceptacji przez Zamawiającego.
17.	Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w wysokości 8 000 000,00 zł. Brak ubezpieczenia 
w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Każdorazowo, w terminie 3 dni od wezwania, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej 
z dowodem zapłaty składki. Aktualna polisa OC z dowodem zapłaty składki stanowi załącznik do Umowy.
18.	Jeżeli Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia, Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

§4 
Termin realizacji
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ....................... dni od dnia podpisania umowy, 
z tym że dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 5
Podwykonawcy
1.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2.	Zgłoszenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót i musi zawierać dane Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, dane kontaktowe osób do kontaktu ze strony Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy). 
3.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
4.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jednocześnie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może następować później niż 14 dni przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. 
6.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca/Podwykonawca, zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą. 
7.	Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia Wykonawcy i Podwykonawcy do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1)	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
3)	nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
4)	w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 
5)	w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego; 
6)	postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 
7)	postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie Stron według zasad określonych w niniejszej Umowie; 
8)	umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 
9)	umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa; 
10)	okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego; 
11)	umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 
12)	umowa podwykonawcza zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamówień publicznych. 
8.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
9.	Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
10.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 7. 
11.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
12.	Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 7 lub 10 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
13.	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
14.	W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
15.	W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
16.	Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
17.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę w przypadku: 
1)	zawarcia umowy z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 
2)	zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
3)	nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego, 
4)	w zakresie części wynagrodzenia przewyższającej wartość wynikającą z obmiaru robót wykonanych przez podwykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), według cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącym część jego oferty. 

§ 6
Wynagrodzenie podwykonawcy
1.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
3.	Wykonawca (lub odpowiednio Podwykonawca) są zobowiązani poinformować Podwykonawcę (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcę) o uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą wartości robót, które będzie wykonywał dany Podwykonawca w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nastąpi to poprzez przesłanie przez Wykonawcę (lub odpowiednio Podwykonawcę) projektu umowy o podwykonawstwo, zarówno do Zamawiającego 
i Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcy). Jednocześnie na żądanie Zamawiającego – Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie nadania ww. pisma do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 
4.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 
5.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
6.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
7.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
8.	Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
9.	Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako „kodeks cywilny”), jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 7
Wynagrodzenie
1.	Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości brutto ...................... (słownie złotych: ................................). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały:
Kwota netto w wysokości ................................... zł.
Podatek VAT w wysokości .................................. zł
Z tego wynagrodzenie brutto za:
1)	Opracowanie dokumentacji projektowej ze zgłoszeniem robót budowlanych / uzyskaniem niezbędnego pozwolenia i sprawowaniem nadzoru autorskiego w wysokości ...................... zł
2)	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową w wysokości ...................... zł
2.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej.
4.	W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku.
5.	Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6.	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej wystawienia. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7.	Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego i zawierać następujące dane: Nabywca : Gmina Kiece, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25. Odbiorca faktury : Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, PL. Niepodległości 1, 25-001 Kielce, NIP: 657-276-81-94
8.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w częściach, zgodnie z zakresem i rodzajem zrealizowanych robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa 
w § 1 ust. 4,  w następującej wysokości:
–część pierwsza – po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę w wysokości kwoty określonej w ust. 1 pkt 1,
– część druga – w wysokości 15% kwoty określonej w ust. 1 pkt 2 po zrealizowaniu części robót budowlanych i potwierdzonych przez nadzór inwestorski,
– część trzecia – w wysokości 15% kwoty określonej w ust. 1 pkt 2 po zrealizowaniu części robót budowlanych i potwierdzonych przez nadzór inwestorski,
– część czwarta – w wysokości 15% kwoty określonej w ust. 1 pkt 2 po zrealizowaniu części robót budowlanych i potwierdzonych przez nadzór inwestorski,
– część piąta – w wysokości 15% kwoty określonej w ust. 1 pkt 2 po zrealizowaniu części robót budowlanych i potwierdzonych przez nadzór inwestorski,
– część szósta – w wysokości 40% kwoty określonej w ust. 1 pkt 2 po zrealizowaniu części robót budowlanych i potwierdzonych przez nadzór inwestorski,

§ 8 
Klauzula waloryzacyjna
1)	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 7 niniejszej umowy we wskazanych niżej przypadkach:
a)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d)	zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 poz. 427) - jeśli zmiany określone w pkt 1 lit a)-d) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2)	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów 
i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
3)	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, 
że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
4)	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu. 
5)	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu. 
6)	Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a)-d) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi/dostawy/roboty budowlane 6, których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano. 

§ 9 
Klauzula waloryzacyjna – wzrost cen materiałów i kosztów
1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 
1)	minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy 
do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, 
w którym upłynął termin do złożenia oferty.
2)	poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca poprzedzającego planowany termin wykonania robót budowlanych ,. Poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z miesiąca poprzedzającego planowany termin wykonania robót budowlanych, a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym upłynął termin do złożenia oferty. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
3)	Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. 
4)	Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 
5)	Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 3% 
w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 umowy; 
6)	Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jednorazowo  w okresie wskazanym w pkt2. 
7)	Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy. 
8)	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 10 
Odbiory
1.	Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru dokumentacji projektowej i robót, stanowiących Przedmiot Umowy.
2.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objętego niniejszą Umową, a odbiory dokonywane będą po wykonaniu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, jako odbiory częściowe oraz odbiór końcowy całego Przedmiotu Umowy.
3.	Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Z czynności odbioru spisany będzie protokół.
4.	Rozpoczęcie czynności odbiorowych robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu części Przedmiotu Umowy i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Umowy.
5.	Wszystkie odbiory robót budowlanych (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.
6.	Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
7.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 4, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy.
8.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
1)	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych.
2)	nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a)	zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 
i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,
b)	w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
3)	Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
4)	Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 12.

§ 11
Kary umowne
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)	za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Umowy,
– w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy;
2)	za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, w stosunku do harmonogramu rzeczowego– w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1pkt 2 Umowy;
3)	za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 10 ust. 8 Umowy, w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;
4)	z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 7 ust. 1 Umowy;
5)	z tytułu:
a)	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany;
b)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;
c)	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy;
d)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
karę umowną w wysokości w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek opisanego 
tu naruszenia. 
2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych.
3.	Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy.
4.	Łączna wysokość kar umownych wynosi 30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy;

§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.	Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „Zabezpieczeniem”.
2.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3.	Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ........................ zł (słownie: ................................),
4.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
5.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6.	Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
7.	Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach:
1)	70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 8 Umowy;
2)	30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, 
o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.
8.	Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego przed zawarciem umowy: ........................ z dopiskiem: "Zabezpieczenie – ........................".
9.	Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania Umowy – do chwili jej podpisania. 

§ 13
Prawa autorskie
1.	Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będą mu przysługiwać wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (zwanej w niniejszym paragrafie „Dziełem”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu niniejszej Umowy są wszelkie projekty, materiały, grafiki, zdjęcia, filmy, materiały i prezentacje cyfrowe, dokumentacje powstałe w związku z realizacją Umowy, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 24 z późn. zm., zwanej dalej „prawo autorskie”).
2.	Z chwilą stworzenia (ustalenia) Dzieła, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych z prawem zastosowania Dzieła do realizacji tylko jednej budowy, zgodnie z art. 61 prawa autorskiego.
3.	Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności: 
1)	utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, cyfrowo,
2)	zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, cyfrowo, 
3)	wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
4)	publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie), 
5)	publicznego wystawiania.
4.	Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
5.	Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono Dzieło. 
6.	Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonane zostanie 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej Umowy.
7.	Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających 
z określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zależnych praw autorskich.
8.	Wykonawca w związku z wykonaniem niniejszej Umowy nie doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek autorskich praw osobistych lub majątkowych, w tym praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
9.	W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek podmiotu trzeciego zgłaszającego jakiekolwiek roszczenia z wyżej wymienionych tytułów względem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu, w tym do pokrycia odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem powyższych roszczeń. 
10.	W przypadku, gdy na skutek okoliczności opisanych w ust. 8 powyżej Zamawiający zostanie prawomocnie uznany za naruszającego autorskie prawa osobiste lub majątkowe, Wykonawca zwróci lub uiści za Zamawiającego kwoty należne danemu podmiotowi trzeciemu

§ 14
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1.	Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2.	W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 15
Rękojmia i gwarancja
1.	Wykonawca udziela gwarancji jakości na poszczególne elementy przedmiotowego obiektu:

Element	Okres minimalnej gwarancji	
Konstrukcje budowlane 	20 lat	
Urządzenia technologiczne stanowiące pełną dostawę producenta 	zgodnie z gwarancją producenta - min. 5 lat;	
Roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe 	…… lat	
Rozwiązania / nawierzchnie drogowe	5 lat	
Napędy bram 	5 lat	
Instalacje (w tym np. elektryczne ogólne)	5 lat	
Stacja transformatorowa	5 lat	
Ładowarki autobusów	5 lat	
Instalacja PV (moduły)	25 lat produkt / 12 lat moc	
Falownik PV	10 lat	
Magazyn energii	10 lat	
System CCTV	3 lata	
SSP	3 lata	
SSWiN / SKD	3 lata	
Okablowanie strukturalne	25 lat (system)	
UPS	5 lat	

2.	W okresie gwarancji należy zapewnić wszelkie przeglądy i czynności serwisowe wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych odrębnych przepisów, wymagań producentów urządzeń oraz zakup i montaż wszelkich materiałów eksploatacyjnych urządzeń związanych z czynnościami serwisowymi (nie dotyczy serwisu związanego z niepoprawnym użytkowaniem urządzeń). Przeglądy serwisowe zgodne z wytycznymi producentów, będą musiały być wykonywane przez Wykonawcę celem utrzymana gwarancji - oznacza to przeglądy serwisowe wszystkich zainstalowanych urządzeń na obiekcie - zgodnie z zaleceniami producenta zapisanymi w karcie gwarancyjnej. 
3.	W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na wniosek Zamawiającego lub Użytkownika obiektu weźmie nieodpłatny udział w przeglądach gwarancyjnych. 
4.	Wykonawca przystąpi do usuwania wady w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od powiadomienia o wadzie (telefonicznie, faxem, pismem, mailem) i zakończy jej usuwanie 
w uzasadnionym technicznie terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.	Jeżeli Wykonawca, po dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wady
w wyznaczonym terminie, nie usunie wady, Zamawiający będzie upoważniony, poza realizacją uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi i gwarancji, do samodzielnego usunięcia wady albo zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi – przy zastosowaniu dowolnej metody lub wymiany rzeczy na wolną od wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający w tym celu skorzysta z zatrzymanego zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady.
6.	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o samodzielnym usunięciu wady albo zleceniu usunięcia innemu podmiotowi.
7.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach.
9.	Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z rękojmi.
10.	Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy i biegnie od dnia odbioru robót budowlanych.

§ 16
Zmiana treści umowy
1.	Terminy ustalone w § 4 ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1)	zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy;
2)	braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającego 
z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego okoliczności, 
3)	okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
4)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
5)	zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne i/lub konieczność wykonania badań archeologicznych, mających istotny wpływ na termin realizacji robót,
6)	konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,
7)	prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie 
w realizacji Umowy, lub gdy
8)	zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych oraz ust. 3 Umowy.
2.	W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, 
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub czasu potrzebnego na wykonanie robót dodatkowych. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3).
3.	Niezależnie, od postanowień ust. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy:
1)	jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy;
2)	jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy. 
Powyższe dotyczy zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia zakresu Umowy i zw. z tym wynagrodzenia, a także terminu realizacji Umowy.
4.	W przypadku, gdy do całkowitego wykonania Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie Protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, jakich elementów Przedmiotu Umowy roboty dodatkowe dotyczą oraz w jaki sposób są związane z Przedmiotem Umowy. Bez zatwierdzonego Protokołu konieczności, zgodnie 
z zapisami powyżej, Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Zasady wyceny robót dodatkowych zostały określone w § 11 Umowy.
5.	Jeżeli konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wynikającym 
z niniejszej Umowy.
6.	Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ostrzegania Zamawiającego o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji dotyczących uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przedmiotowego wydarzenia lub okoliczności mających wpływ na realizację robót budowlanych będących Przedmiotem niniejszej Umowy. Okoliczności, o których mowa powyżej mogą wpłynąć na zmianę treści niniejszej Umowy jedynie na warunkach określonych powyżej lub w art. 455 Prawa zamówień publicznych.
7.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8.	W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy -odpowiednie zapisy Umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
9.	Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 
10.	Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Prawa zamówień publicznych i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy:
1)	zmiana danych osób kontaktowych,
2)	zmiana danych teleadresowych, 
3)	zmiana formy zabezpieczenia,
4)	zmiana osób z personelu Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych kwalifikacji i doświadczenia, jakie było wymagane na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

§ 17
Przedstawiciele stron
1.	W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego reprezentować będą: 
1)	...............................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/
2)	...............................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/
2.	W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcę reprezentować będą: 
1)	...............................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/
2)	...............................................................................................................
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady koordynacyjne.

§ 18
Postanowienia końcowe
1.	Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2.	W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
3.	Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
4.	Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
5.	Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej.
6.	Wszelkie sprawy sporne powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
8.	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby Strony uznają za doręczone.
9.	Każda korespondencja pisemna dotycząca umowy powinna być adresowana do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Pl. Niepodległości 1, 25-001 Kielce.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1)	Program Funkcjonalno-Użytkowy,
2)	oferta Wykonawcy,
3)	kopia polisy OC,
4)	SWZ.